سرکار خانم لامعی
مدیرعامل محترم شرکت رادمان انرژی نوآوران

با سلام و احترام

             عطف به قراردادهای شماره 006-1404، 007-1404، 009-1404 و 010-1404، همانگونه که مستحضرید فعالیت‌های مربوط به مکان‌یابی و انجام مطالعات امکان‌سنجی پروژه‌های نیروگاهی نیریز و بشرویه از ابتدای فروردین‌ماه 1404 آغاز گردیده و این شرکت در چارچوب تعهدات قراردادی، نسبت به پیشبرد مراحل مختلف پروژه‌ها اقدام نموده است.

در پروژه نیریز، مجوز محیط زیست در تاریخ 27/03/1404، مجوز تغییر کاربری و شروع عملیات خاکی در تاریخ 04/09/1404 و مجوز اتصال به شبکه در تاریخ 07/10/1404 اخذ گردیده است. همچنین در پروژه بشرویه، مجوز محیط زیست در تاریخ 11/06/1404، مجوز منابع طبیعی در تاریخ 06/08/1404 و مجوز اتصال به شبکه در تاریخ 01/07/1404 دریافت شده است. در ادامه، قراردادهای فروش برق با ساتبا برای پروژه نیریز در تاریخ 05/08/1404 و برای پروژه بشرویه در تاریخ 25/12/1404 منعقد گردیده که به منزله فراهم بودن بستر قانونی جهت آغاز کلیه فعالیت‌های اجرایی پروژه‌ها می‌باشد.علیرغم تفاهم‌ نامه‌های فی‌مابین، تأخیر در تصمیم‌گیری و عدم تأمین به‌موقع منابع مالی از سوی آن کارفرمای محترم، موجب بروز وقفه و اخلال جدی در روند اجرایی پروژه‌ها گردیده است.

با توجه به اینکه اخذ و تمدید مجوزها و حفظ اعتبار آن‌ها مستلزم پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها در بازه‌های زمانی مشخص می‌باشد، تداوم این شرایط می‌تواند منجر به بروز مخاطراتی مانند ابطال مجوزها (از جمله تغییر کاربری و مالکیت زمین در پروژه‌های نیریز و بشرویه)، از دست رفتن ظرفیت‌های اتصال به شبکه و ضرورت انجام مجدد مطالعات فنی گردد که بدیهی است مسئولیت تبعات آن متوجه کارفرمای محترم خواهد بود.

این شرکت علیرغم عدم ایفای کامل تعهدات مالی از سوی کارفرما، به منظور جلوگیری از توقف پروژه‌ها، اقدامات اجرایی از جمله فرآیند انتخاب پیمانکار را در دستور کار قرار داده و با وجود شرایط خاص حاکم بر کشور، حداکثر تلاش خود را در جهت کنترل آثار این عوامل بر پیشرفت پروژه‌ها به کار گرفته است.

لذا با عنایت به مراتب فوق و ضرورت جلوگیری از بروز خسارات بیشتر، انتظار می‌رود دستور فرمایید نسبت به پرداخت فوری صورت‌وضعیت‌های ارسالی این شرکت اقدام لازم به عمل آید. 
                                                                                  با تجدید احترام
                                                                                                  علی ساوه ئی 
                                                                                           معاون مهندسی و عملیات